제주 서부지역 지하수 시추 조사공 설치

-  과 업 지 시 서  -

2018. 02

제주 서부지역 지하수 오염방지를 위한

시추 조사공 설치

1. 일반사항

○ 본 사업은 서부지역 한경면 일대 오염원 및 오염물질 유동경로를 규명하고자 지하수의 수질을 조사·연구하기 위한 시추 조사공 설치 사업으로서 이 과업지시서에 제시되어 있지 않은 사항은 감독원과 협의하여 시행한다.

○ 본 사업을 수행함에 있어 사업내용의 변경이나 조정이 필요한 경우 감독원과 사전 협의하여 시행할 수 있다.

○ 본 사업시행 과정에서 취득한 모든 유·무형의 자료는 제주특별자치도 소유이며, 허가 없이 외부로 누출하거나 활용하여서는 안 된다.

○ 본 사업을 수행함에 있어 도급자의 과오나 준비미비, 조사누락 등으로 사업내용에 하자가 있을 때에는 도급자의 부담으로 재실시하여야 하며, 사업완료 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관의 수정·보완요구가 있을 때에는 주관기관의 부담으로 시정·조치한다.

○ 본 사업의 과업내용 및 수량은 사업시행 과정에서 발주기관과 사전 협의하여 증감할 수 있으며, 과업내용의 증가분에 대한 대가지급은 예산의 범위 내에서 정산한다.

○ 본 과업지시서에 제시된 이외의 사항은 지방자치단체 공사계약일반조건의 규정에 의한다.

1-1. 현장관리 및 공정보고

○ 현장대리인은 공사 착공 전에 사업현장을 확인하고, 본 과업지시서 및 설계도서 내용과 현장여건 등을 검토하여 사업시행에 중대한 차질이 우려될 경우에는 감독원에게 보고하여야 한다.

○ 현장에는 현장대리인을 배치하여 현장관리를 철저히 하여야 하며, 소정의 유자격 기술자를 배치하여 공사수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

○ 현장대리인은 사업 착공과 동시에 착수계 및 사업시행 공정예정표를 작성하여 제출하여야 한다.

○ 현장대리인은 공사 진행상황 및 특이사항 등을 감독원에게 보고하여야 한다.

1-2. 공사진행 상황기록

○ 본 사업기간 중에는 아래와 같은 사항을 사진촬영 또는 기록하고 준공계와 함께 제출하여야 한다.

• 착공전 및 착공직후의 현장전경

• 공사진행 단계별 주요공정

• 작업일지 기록 등 기타 감독관이 지시하는 내용

1-3. 안전관리

○ 도급자는 안전관리 책임자를 선임하여야 한다.

○ 유류, 전기, 가스 등 위험물을 사용하는 경우에는 보관 및 취급에 있어 관계법령에 정해진 바에 따라야 한다.

○ 도급자는 안전사고 등이 발생하지 않도록 관련법령에서 정하는 제반수칙을 준수하여야 하며 모든 안전사고의 책임은 도급자가 져야한다.

1-4. 기타사항

○ 본 사업의 주요자재는 KS 규격품 사용을 원칙으로 하고, 감독원의 검사를 받은 후 현장에 반입하여야 한다.

○ 표면에 노출되지 않은 지하매설물은 손상되지 않도록 주의하여야 하며 부주의로 인한 손해배상요구 등은 도급자가 책임져야 한다.

○ 현장 시공관리 요원 및 종사원의 행위가 공사에 지장을 주거나 부적당하다고 판단될 경우 감독원은 도급자에게 교체를 요구할 수 있으며 도급자는 감독원으로부터 교체요구가 있을 때에는 즉시 이행하여야 한다.

○ 사업이 과업지시서 및 설계도서에 맞지 않거나 부적당하다고 지적받았을 때는 도급자 부담으로 이를 즉시 수정 보완하여야 한다.

○ 도급자는 작업원을 고용함에 있어 노동법 및 근로기준법에 명시된 해당 조건을 준수하여야 한다.

○ 시행청은 아래와 같은 사항이 발생하는 경우에는 도급자에 대하여 필요하다고 인정되는 기간 동안 공사의 일부 또는 전부에 대하여 시행중지 명령을 할 수 있다.

• 기상관계로 인하여 시행이 부적당하다고 판단될 때

• 공사 종업원의 기술 미숙으로 조잡한 공사가 우려될 때

• 공사 종업원의 안전을 위하여 필요하다고 판단될 때

2. 조사공 착정

2-1. 일반사항

○ 현장 작업 시에는 시공 상황과 자재 출납사항 등을 기록하여 감독원의 요구 시 제출하여야 한다.

○ 시공시에는 승인을 받은 유해하지 않은 기포제와 생분해성 유압유를 사용하여야 하며, 슬라임 및 기포처리에 만전을 기하여 환경오염을 방지하여야 한다.

○ 굴착공사에 사용하는 굴진용수는 깨끗한 물이어야 하며, 공사 중에는 유류 등의 오염물질이 착정 중인 공내로 유입되지 않도록 항상 청결한 상태를 유지하여야 한다.

○ 굴착공사로 인하여 인근 지하수공에 토사가 유출되는 등의 악영향이 발생할 경우에는 즉시 공사를 중지하고 이의 원인을 파악하여 영향을 최소화시킬 수 있는 대책을 강구한 후 공사를 계속하여야 한다.

○ 공극 방지와 안정된 작업의 수행을 위하여 작업반경에 해당하는 면적은 정지작업(콘크리트 타설)후 시행하고 작업완료 후에는 슬라임을 제거하고 훼손된 토지는 원상복구 하여야 한다.

2-2. 착정규격 및 시공

○ 조사공 착정은 코어회수식 로터리공법에 의해 실시하여야 한다.

○ 착정심도는 지표면으로부터 사업계획서 또는 설계내역서에 기재된 심도를 원칙으로 하며, 다만 시공과정에서 수리지질 여건에 따라 감독원과 협의하여 심도를 증감할 수 있다.

○ 착정구경은 지하수의 오염방지를 위한 채움 그라우팅 및 주변공간 그라우팅을 실시하기 위하여 최종굴착 예정심도가 110m의 경우, 지표로부터 70m 구간은 구경 250㎜로 굴착하고 그라우트재로 되메움 한 후 그라우팅 재료가 완전히 굳은 후 150㎜로 다시 굴착한다.

○ 다만, 현장 지질 여건 등에 따라 그라우팅에 필요한 착정 구간은 감독원과 협의하여 변경할 수 있다. 또한, 그라우팅 재료는 체적 상으로 3%의 벤토나이트를 함유한 시멘트⋅모래 혼합물을 기준으로 하며 시공상 필요시 급결재 사용은 감독원과 협의하여 사용한다. 물과 혼합물의 중량비는 물 : 혼합물 = 1 : 2로 하여 최대한 수축을 방지한다.

2-3. 케이싱 및 스크린 설치

○ 조사공에 설치되는 케이싱 및 스크린은 KS규격 이상의 스테인리스스틸 또는 수도용 PE 직관을 사용하여야 한다.

○ 굴착 전구간에 케이싱 및 스크린을 설치하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 수리지질 여건에 따라 발주기관과 협의하여 조정할 수 있다.

○ 스크린의 개공부 크기는 10㎜이내, 개공율은 10% 이상으로 유공관 개공기로 균일하게 가공된 제품을 사용하여야 한다.

3. 부대 조사⦁분석 등

3-1. EC/온도 측정

○ 다음 각각의 경우에 대하여 전기전도도 및 수온 검층을 실시하되, 전기전도도는 온도차에 의한 영향(약 2%/℃)이 크므로 측정결과치의 통일을 기하기 위하여 25℃의 값으로 환산하여 기록한다.

• 착정작업 종료 후 : 나공상태에서 전기전도도와 수온의 수직적 분포를 검층한다.

• 우물자재 설치완료 후 : 우물자재 설치후의 전기전도도와 수온의 수직적 분포를 검층한다.

○ 시추과정에서 지층의 수직적 수질변화 등을 파악하기 위해 제2대수층 또는 하부대수층 포착후 감독원과 협의하여 전기전도도와 수온의 수직적 분포를 추가적으로 검층한다.

3-2. CCTV 검층

○ 지층의 형성상태, 지하수 유출구간, 자연수위, 우물자재 설치 상태 등을 파악하기 위해 공내 CCTV 검층기를 이용하여 다음 각 시점마다 관정내부를 촬영⋅제출한다.

• 계획심도 착정 완료 후

• 우물자재 설치 완료 후

3-3. 양수시험

○ 조사공의 시추 중 또는 완료된 다음에는 조사공의 대수성을 평가하기 위해 대수층별 양수시험, 관통정 양수시험을 실시하여야 한다.

○ 도급자는 조사공으로부터 최대량을 양수할 수 있는 펌프 등의 필요한 장비를 갖추어야 하고, 양수량과 지하수위를 측정할 수 있는 장비와 더불어 물 시료를 채취할 수 있도록 준비해야 한다.

○ 산출되는 양을 체크하기 위해 압상파이프에 유량계를 부착하여야 하고, P.V.C파이프를 지표에서 시추공 안에 설치하여 P.V.C파이프를 통해 수위를 체크할 수 있도록 해야 한다.

○ 수위 측정은 자동 수위센서를 이용하여 연속 측정을 실시하여야 하고, 결측을 대비하여 수동 수위측정기를 이용하여 수위측정을 병행해야 한다.

∙ 양수시험 시작 후 10분까지, 양수율과 누적양수량 체크간격은 수동 수위측정과 동일한 시간간격으로 체크해야 한다.

∙ 양수시험 종료 후, 수위가 회복하는 동안의 수위측정은 지하수위가 양수이전의 95%까지 회복될 때까지 자동 수위센서와 수동 수위측정기를 이용하여 양수시험 시 체크 시간간격과 동일하게 한다.

∙ 양수시험 종료 후에 수위가 회복하는 동안의 수위측정은 양수이전 수위의 95%(양수로 인해 하강한 전체 수위의 95%)까지 회복될 때 까지 자동 수위센서와 수동 수위측정기를 이용하여 양수시험 시에서와 동일한 시간간격으로 해야 한다.

∙ 단, 발주기관에서 별도 요청 시에는 수질검사용 시료를 채취하여야 한다.

- 대수층별 양수시험(4회, 시작 후 1시간, 4시간, 7시간)

3-4. 지반 및 지질 조사․분석

○ 착정과정에서 회수되는 시추코어는 심도별로 구성암석의 종류 및 특징 등을 기록하여 지질주상도를 작성하여야 한다.

○ 작성된 지질주상도를 상․하류(해안)지역 관측정의 지질주상도와 비교하여 시추 조사공 지역의 지질단면도를 작성하고,

○ 작성된 지질단면도를 토대로 시추 조사공 상․하류 지역의 지층 변화양상과 대수층의 수리성 등을 조사․분석 한다

4. 상부보호공 설치

○ 관정 최상단부에는 오염물질의 공내 유입방지를 위하여 밀폐식 상부보호시설을 설치한다.

○ 밀폐식 상부보호시설의 재질은 스테인리스, 몸체 두께는 5㎜, 덮개 두께는 10㎜, 규격은 직경 200㎜이상으로 수밀한 구조로 이루어져야 하며, 설치심도는 부지여건을 고려하여 감독원과 협의⋅변경할 수 있다.

○ 밀폐식 상부보호시설은 빗물 등이 유입되지 않도록 시설하며, 시건장치를 부착하여 수밀성 및 잠금기능을 강화하며, 모든 재질은 녹슴방지를 위한 마감처리를 철저히 한다.

5. 성과품 제출

○ 본 사업 준공시에는 완료계와 함께 다음과 같은 성과품을 납품하여야 한다.

• 시추 조사 관련자료 1식

• 공사 진행상황 및 준공사진 1식

• 기타 본 사업과 관련하여 발주기관이 요구하는 자료 등