「성산읍 신풍리 제주밭담-SHOP 조성」 사업

과업지시서

2018. 03. 16

제주연구원

제주밭담6차산업화사업 기반구축사업단

I. 과업 개요

1. 과업명 : 성산읍 신풍리 제주밭담-SHOP 조성 사업

2. 과업의 목적

◦ FAO세계중요농업유산 제주밭담을 활용한 농촌마을 6차산업화사업을 추진하는 바, 지역민 소득증대 및 일자리 창출, 밭담브랜드 상품의 판매지원을 위해 성산읍

신풍리 제주밭담-SHOP 조성 사업을 실시함

3. 과업의 주요내용

◦ 제주밭담을 활용한 마을 유휴시설 리모델링 및 재료비 지원

◦ FAO세계중요농업유산 제주밭담의 상징성을 도출한 디자인 개발

◦ 지역자원과 문화를 연계한 밭담-SHOP 조성

◦ 인테리어 디자인 개발 내용

- 마을카페 조성(휴게음식점)

- FAO세계중요농업유산 제주밭담의 가치 확산을 위한 홍보 공간구성

- 제주밭담 브랜드상품 판매 지원을 위한 판매대 제작 등

- 전기설비 구축 및 소품디자인 제안(내, 외부 조명, 창호, 손잡이 등)

- 설계도면 및 용도변경 등 준공에 관한 업무 (마을회 계약업체와 업무연계)

- 주방, 화장실, 판매지원, 홍보 공간 등 디자인 제시

◦ 건물 외부 리모델링 개발 내용

- 신풍리 사업대상지 건물에 대한 전체 컨셉 디자인 제시

- 건물 채광 및 창호 디자인에 관한 계획 제시

- 지역적 자연환경에 고려한 디자인 제시 등

- 외부 간판 및 밭담 인증 사인물 제작

- 기타 필요사항 디자인 제시 등

4. 과업기간 및 예산

◦ 본 과업의 수행기간은 착수일로부터 50일 이내로 한다.

◦ 본 과업 수행기간의 연장은 다음 사항에 한하여 할 수 있다.

- 천재지변 등으로 인하여 과업시행이 불가능하다고 인정된 경우

- 연구원의 방침 등에 의거 변경사유 발생시

◦ 과업예산 : ￦90,000,000원(부가가치세 포함)이내

5. 사업보고

1) 착수보고

◦ 과업수행자는 계약일로부터 7일 이내에 착수계 및 과업수행계획서 등 관련 서류를 제출하고 착수보고회를 실시하여, 발주기관(과업지시자)의 승인을 득한 후 사업을 추진하여야 함

※ 착수보고회 자료는 보고회 2일 전에 제출하여야 하며 보고는 반드시 과업

책임자가 보고하여야 함

◦ 과업수행계획서에는 과업의 수행방향, 과업내용, 세부추진일정, 과업수행 책임자를 포함한 분야별 기술진 투입인력 현황 등 제주밭담 기반구축사업단에서 제시한 과업내용이 포함되어야 함

※ 제출서류 : 착수계, 과업수행계획서, 보안각서(필요시) 등

2) 디자인 개발 보고 : 전체 디자인 컨셉 완료시

3) 수시보고 : 발주기관(과업지시자)의 요청 시

4) 중간보고회 : 제주밭담-SHOP 조성 중 현장점검 및 현장보고회 실시

5) 최종보고회

◦ 과업수행자는 과업종료 전 7일 이내 사업추진의 전반적인 내용을 포함한 최종보고회를 실시하여야 함 (현장보고)

◦ 최종보고회 자료는 보고회 2일 전에 제출하여야 하며 보고는 반드시 총괄

책임자가 보고하여야 함

※ 제출서류(관련 제출서류는 과업기간 내에 제출하여야 함)

- 최종결과보고서 10부 (A4기준 컬러)

- 완료계, 완료검사원, 완료내역서

- 인테리어(소품포함) ․ 익스테리어 조성 사진대장(자체양식) 첨부

- 원가계산서

- 가격산출내역서

- USB 2개(준공도면 및 시방서 등)

- 정산서 제출 (증빙서 첨부)

6. 용역비 정산

◦ 용역비는 용역 완료시점에 증빙서를 첨부하여 정산한다.

7. 기 타

◦ 본 과업지시서에 명시되지 않은 것이라도 본 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요하다고 인정되는 사항은 특별한 이유가 없는 한 응해야 한다.

II. 사후관리

◦ 인테리어(소품포함)․익스테리어 조성이 시방서와 상이하거나, 불량 또는 파손이         있는 경우 보완 및 보수하여야 함

◦ 인테리어(소품포함)․ 익스테리어 조성 완료 후 대금 청구 시 하자이행보험증권

첨부하여야 함

◦ 시공 완료 후(완료계 제출 시점) 1년 동안 인테리어(소품포함)․ 익스테리어

조성과 관련된 하자가 발생 시 무상 보수함

- 단 천재지변으로 인한 재해의 경우 예외